ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению от 31.03.2021 №295                                                         
 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ордынского района Новосибирской области
                                                                              от 31.03.2021 №295

 Муниципальная программа 
«Газификация Ордынского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы» 

р.п. Ордынское

2021 г
1. Паспорт муниципальной программы
«Газификация Ордынского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы» 

Наименование Программы	 Муниципальная программа «Газификация Ордынского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа)	
Основание для разработки Программы	подпрограмма «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»	
Разработчик Программы	Отдел ЖКХ администрации Ордынского района  	
Заказчик Программы	Администрация Ордынского района  	
Координатор Программы	Первый заместитель главы администрации Ордынского района 
Ю.В. Краус	
Исполнитель основных мероприятий Программы	Администрация Ордынского района
Муниципальные образования Ордынского района  	
Цель и задачи Программы	Цель Программы:
Газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо объектов социальной сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и населения Ордынского района.
Задачи программы:
 1. Строительство сетей газораспределения.
  2. Газификация жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, объектов социальной сферы, предприятий, организаций расположенных на территории Ордынского района.	
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в один этап, сроки реализации программы: 2022-2024 годы
	
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования, необходимый для реализации программы, на 2022-2024 годы составит 267 273,63 тыс. руб., в том числе:
- 2022 год – 14 213,63 тыс. руб., 
из них:
- областной бюджет 13 502,95 тыс. руб., 
- местный бюджет 710,68 тыс. руб., 

-2023 год – 185 460 тыс. руб.,
из них:
- областной бюджет 176 187 тыс. руб.,
- местный бюджет 9 273 тыс. руб.,

-2024 год – 67 600 тыс. руб.,
из них:
- областной бюджет 64 220 тыс. руб.,
- местный бюджет 3 380 тыс. руб.,

Всего из них:
- областной бюджет 253 909,95 тыс. руб., 
- местный бюджет 13 363,68 тыс. руб.
	
Целевые индикаторы Программы	– ввод в действие сетей газораспределения;
– перевод на газовое топливо домовладений и предприятий.	
Оценка эффективности реализации Программы, ожидаемые конечные результаты       	Реализация программы позволит осуществить газификацию населенных пунктов, предприятий, организаций Ордынского района, улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Ордынском районе, повысит качество жизни населения, будет способствовать подъему экономики района.
По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:
– уровень газификации объектов коммунальной теплоэнергетики Ордынского района – 85%;
– уровень газификации жилых домов, расположенных на территории Ордынского района – 93%;
– уровень газификации объектов социальной сферы – 89%.

2.	Обоснование необходимости разработки программы.

В районе в течение 2013-2020 гг. выполнялись мероприятия в соответствии с долгосрочной целевой программой «Газификация территорий населенных пунктов Ордынского района Новосибирской области на 2013 - 2015 годы», муниципальной программой «Газификация территорий населенных пунктов Ордынского района Новосибирской области на 2016-2018 годы», муниципальной программой «Газификация территорий населенных пунктов Ордынского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» и муниципальной программой «Газификация Ордынского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы».
За период 2012-2020 гг. в Ордынском районе были построены и введены в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы в с. Вагайцево, р.п. Ордынское, п. Чернаково, д. Новый Шарап, с. Красный Яр, с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово, с.Филиппово, с.Кирза, с.Рогалево, с.Усть-Луковка Ордынского района Новосибирской области, общей протяженностью 258 км. 
Построено 12 муниципальных блочно-модульных газовых котельных в р.п. Ордынское, в с. Вагайцево, с. Верх-Ирмень, д. Новый Шарап, с.Красный яр общей мощностью 41 мВт.
Смонтировано 3111 ВДГО (внутридомовое газовое оборудование) по району. Подключено и пользуются газом 2679 домовладений. Уровень газификации уже достиг 53% от общего количества домовладений и квартир по району.
Для дальнейшей газификации района и перевода угольных котельных и домовладений на природный газ необходима корректировка показателей и создание новой Программы газификации, что в дальнейшем позволит решить не только важные технико-экономические, но и социальные задачи.
 
3.	Основные цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Основной целью программы является:
 Газификация населенных пунктов и перевод на газовое топливо объектов социальной сферы, предприятий и населения Ордынского района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие задачи:
 1. Строительство сетей газораспределения.
2. Газификация домовладений, объектов социальной сферы, предприятий, организаций расположенных на территории Ордынского района.
 Важнейшими целевыми индикаторами является:
– ввод в действие сетей газораспределения;
– перевод на газовое топливо домовладений и организаций.
Планируемые показатели (индикаторы) выполнения программы приведены в приложении №1.

4.	Система программных мероприятий

Система программных мероприятий определяется задачами программы.
	Программа предусматривает следующие мероприятия по газификации Ордынского района:
1. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей.
     2. Газификации домовладений, объектов социальной сферы, предприятий, организаций, расположенных на территории Ордынского района.
     3. Информационно-консультативная поддержка населения и организаций Ордынского района по вопросам газификации.
Объекты газификации Ордынского района и их объемы подлежат ежегодному уточнению. 
Комплекс мероприятий в разрезе целей и задач программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении №2 к программе.
Выполнение в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить достижение целей и задач реализации Программы.

5.	Механизмы реализации Программы
и система управления реализацией Программы

Непосредственное управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Ордынского района – координатор Программы, который выполняет следующие функции:
– осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;
– контролирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по своевременному выполнению мероприятий Программы;
– анализирует выполнение мероприятий Программы и вносит предложения по корректировке Программы.
Отдел ЖКХ администрации Ордынского района: 
– проводит мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;
– осуществляет подготовку проектов постановлений администрации Ордынского района об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
– представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, управление финансов и налоговой политики Ордынского района заявки на финансирование программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации программы;
– ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет Координатору Программы информацию о ходе исполнении Программы. 
Исполнители мероприятий Программы:
– планируют работу по реализации Программы;
– проводят мероприятия в рамках Программы по своим направлениям деятельности;
– вносят предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
– привлекают материальные, технические и иные ресурсы для реализации мероприятий Программы.
Структурные подразделения администрации района предоставляют в отдел ЖКХ администрации Ордынского района:
– результаты реализации программных мероприятий по подведомственным учреждениям;
– предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, заявку на финансирование программных мероприятий, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации программы.
Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий.
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, осуществляет Координатор Программы. 

6.	Финансовое обеспечение Программы

       Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации программы, на 2022 –2024 годы составит 267 273,63 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 14 213,63  тыс. руб.; 2023 год – 185 460 тыс. руб; 2024 год – 67 600 тыс. руб. Всего из них: областной бюджет 253 909,95 тыс. руб., местный бюджет 13 363,68 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Ордынского района на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.
Объемы и источники финансирования Программы по годам предусмотрены в приложении №3 к программе.

7.	Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит осуществить газификацию населенных пунктов и предприятий, организаций Ордынского района, улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Ордынском районе, повысит качество жизни населения, будет способствовать подъему экономики района.
По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих результатов, отражающих эффективность предусмотренных в Программе мероприятий:
– уровень газификации объектов коммунальной теплоэнергетики Ордынского района – 85%;
– уровень газификации жилых домов, расположенных на территории Ордынского района – 93%;
– уровень газификации объектов социальной сферы – 89%. 

Приложение 1
к муниципальной программе 
«Газификация Ордынского района 
Новосибирской области 
на 2022-2024 годы» 

Задачи и целевые индикаторы Программы

Задачи, требующие решения для достижения цели	
Наименование целевого индикатора	
Единица измерения	
Значение целевого индикатора в том числе по годам	
			2022	2023	2024	

Задача 1: Строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей.	Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей  всего,
в том числе:	
км		53,6	19,8	
	с. Спирино	км		25,4		
	с. Верх-Ирмень (2-я очередь)	км		28,2		
	с. Новопичугово (2-я очередь)	км			4,8	
	д.Плотниково, д.Поперечное Верх-Ирменского сельсовета	км			15	

Задача 2: Газификация домовладений, объектов социальной сферы, предприятий, организаций расположенных на территории Ордынского района.	Перевод на газовое топливо домовладений всего, в том числе:	
ед.			1538	
	с. Спирино	ед.			638	
	с. Верх-Ирмень (2-я очередь)	ед.			400	
	с. Новопичугово (2-я очередь)	ед.			150	
	д.Плотниково, д.Поперечное Верх-Ирменского сельсовета	ед.			350	

Приложение 2
к муниципальной программе 
«Газификация Ордынского района 
Новосибирской области 
на 2022-2024 годы»

Мероприятия 
Муниципальной программы «Газификация территорий населенных пунктов Ордынского района Новосибирской области на 2022- 2024 годы» 

№ п/п

	
Наименование мероприятий 
Источники финансирования	
Задание по вводу мощностей	
Сроки реализации мероприятий программы, год	
Объем финансирования, тыс.руб.

Ответственные исполнители	
				2022-2024	
2022	
2023	
2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
п.1 Строительство распределительных газовых сетей.	
п.1.1. Проектирование распределительных газовых сетей.	

1.1.	Проектирование распределительных газовых сетей. всего,
в том числе:	73,4 км	2022-2024	2022-2024	

2022	

2023	

2024	Отдел ЖКХ администрации Ордынского района;
Главы муниципальных образований	

	с. Спирино	25,4 км	2022	7 902,37	7 902,37				
	с. Верх-Ирмень (2-я очередь)	28,2 км	2022	6 311,26	6 311,26				
	с. Новопичугово (2-я очередь)	4,8 км	2023	1 900,00		1 900,00			
	д.Плотниково, д.Поперечное Верх-Ирменского сельсовета	15 км	2023	4 000		4 000			
	Итого по п.1.1.			20 113,63	14 213,63	5 900			
	-областной бюджет			19 107,95	13 502,95	5605			
	- местный  бюджет			1 005,68	710,68	295			
	- внебюджетный источник								
п.1.2. Строительство распределительных газовых сетей.	

1.2.	Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов высокого и низкого давления всего,
в том числе:	73,4 км	2022-2024	2022-2024	

2022	

2023	

2024	Отдел ЖКХ администрации Ордынского района;
Главы муниципальных образований	
	с. Спирино	25,4 км	2023	85 090,00		85 090,00			
	с. Верх-Ирмень (2-я очередь)	28,2 км	2023	94 470,00		94 470,00			
	с. Новопичугово (2-я очередь)	4,8 км	2024	17 600,00			17 600,00		
	д.Плотниково, д.Поперечное Верх-Ирменского сельсовета	15 км	2024	50 000			50 000		
	Итого по п.1.2.			247 160		179 560	67 600		
	-областной бюджет			234 802		170 582	64 220		
	- местный  бюджет			12 358		8 978	3 380		
	- внебюджетный источник			-	-	-	-		
Всего по программе	
			2022-2024	

2022	

2023	

2024		
	Всего по программе
в том числе:		267 273,63	20 113,63	179 560	67 600		
	областной бюджет		253 909,95	19 107,95	170 582	64 220		

	местный бюджет		13 363,68	1 005,68	8 978	3 380		
	внебюджетный источник							

Приложение 3
к муниципальной программе 
«Газификация Ордынского района 
Новосибирской области 
на 2022-2024 годы»

Сводные финансовые затраты Программы (тыс. руб.) *

	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)	ВСЕГО (тыс. руб.):	
Областной бюджет 	13 502,95	176 187	64 220	253 909,95	
Муниципальный бюджет 	710,68	9 273	3 380	13 363,68	
Внебюджетный источник	-	-	-	-	
ВСЕГО:	14 213,63	185 460	67 600	267 273,63	

*Подлежит ежегодному уточнению